Решение: все вычисления будем заносить в таблицу.
Перечень работ и их продолжительность перенесем во вторую и третью графы. При этом работы следует записывать в графу 2 последовательно: сначала начиная с номера 1, затем с номера 2 и т.д.
Во второй графе поставим число, характеризующее количество непосредственно предшествующих работ (КПР) тому событию, с которого начинается рассматриваемая работа.
Так, для работы (7,8) в графу 1 поставим число 2, т.к. на номер 7 оканчиваются 2 работы: (5,7),(6,7).
Далее заполняем графы 4 и 5. Для работ, имеющих цифру 0 в графе 2, в графу 4 также заносятся нули, а их значения в графе 5 получаются в результате суммирования граф 3 и 4.
Для заполнения следующих строк графы 4, т.е. строк начиная с номера 2, просматриваются заполненные строки графы 5, содержащие работы, которые оканчиваются на этот номер, и максимальное значение переносится в графу 4 обрабатываемых строк.
Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет заполнена последняя строка таблицы.
Заполнение графы 4.
Рассмотрим события: (1,2): 6;. Заносим значение 6 в графу.
Рассмотрим события: (1,3): 4;. Заносим значение 4 в графу.
Рассмотрим события: (2,4): 10;. Заносим значение 10 в графу.
Рассмотрим события: (3,5): 10;. Заносим значение 10 в графу.
Рассмотрим события: (3,6): 7;. Заносим значение 7 в графу.
Рассмотрим события: (5,7): 18;; (6,7): 12;. Максимальное значение: 18. Заносим его в графу.
Графы 6 и 7 заполняются обратным ходом, т.е. снизу вверх. Для этого просматриваются строки, оканчивающиеся на номер последнего события, и из графы 5 выбирается максимальная величина, которая записывается в графу 7 по всем строчкам, оканчивающимся на номер последнего события (т.к. tр(i)= tп(i)).
Процесс повторяется до тех пор, пока не будут заполнены все строчки по графам 6 и 7.
Заполнение графы 7.
Рассмотрим события:
(4,8): 13
(7,8): 25
Максимальное значение: 25. Записываем его в графу 7 по всем строчкам, оканчивающимся на номер последнего события 8.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 7. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 7.
(7,8): 25 - 7 = 18;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 18.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 7. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 7.
(7,8): 25 - 7 = 18;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 18.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 6. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 6.
(6,7): 18 - 5 = 13;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 13.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 5. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 5.
(5,7): 18 - 8 = 10;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 10.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 4. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 4.
(4,8): 25 - 3 = 22;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 22.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 3. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 3.
(3,5): 10 - 6 = 4;
(3,6): 13 - 3 = 10;
В графу 6 среди них выбирается минимальная величина, которая переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 4.
Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер предпоследнего события, т.е. 2. Для определения графы 7 этих строк просматриваются все строчки, начинающиеся с номера 2.
(2,4): 22 - 4 = 18;
Данное значение переносится в графу 7 по обрабатываемым строчкам.. В нашем случае это значение: 18.
Содержимое графы 8 равно разности граф 6 и 4 или граф 7 и 5.
Работа (i,j)	Количество предшествующих работ	Продолжительность tij	Ранние сроки: начало tijР.Н.	Ранние сроки: окончание tijР.О.	Поздние сроки: начало tijП.Н.	Поздние сроки:окончание tijП.О.	Резервы времени: полный tijП	Резервы времени: свободный tijС.В.	Резервы времени: событий Rj	
(1,2)	0	6	0	6	12	18	12	0	12	
(1,3)	0	4	0	4	0	4	0	0	0	
(2,4)	1	4	6	10	18	22	12	0	12	
(3,5)	1	6	4	10	4	10	0	0	0	
(3,6)	1	3	4	7	10	13	6	0	6	
(4,8)	1	3	10	13	22	25	12	12	0	
(5,7)	1	8	10	18	10	18	0	0	0	
(6,7)	1	5	7	12	13	18	6	6	0	
(7,8)	2	7	18	25	18	25	0	0	0	

Примечание.
а) графы 1 и 3 заполняются на основе исходных данных.
б) в графе 2 записывается количество предшествующих работ по сетевому графику или определяется из графы 1 по числу работ, имеющих второй цифрой в коде ту, с которой начинается данная работа.
г) в графе 4 раннее начало работ, выходящих из исходного события, а раннее окончание этих работ равно их продолжительности (гр. 5). Раннее начало последующих работ определяется путем выбора максимального из сроков раннего окончания предшествующих работ. Количество сравниваемых сроков равно количеству предшествующих работ графы 2. Раннее начало последующих работ можно определить после того, как найдено раннее окончание предшествующих. В свою очередь раннее окончание каждой работы находится как сумма величин раннего начала и продолжительности данной работы;
г) продолжительность критического пути определяется после заполнения граф 4 и 5 как максимальная величина из сроков раннего окончания работ, которые ведут к завершающему событию 9;
д) найденная величина критического пути ТKP дням заносится в графу 7 для всех работ, ведущих к завершающему событию. Затем заполнение ведется снизу вверх. Находятся все работы, следующие за рассматриваемой, и определяются разности между поздним окончанием этих работ и их продолжительностями. Минимальная из величин заносится в графу 7;
е) в графе 6 позднее начало работы определяется как разность позднего окончания этих работ и их продолжительности (из значений графы 7 вычитаются данные графы 3);
ж) в графе 8 полный резерв времени работы определяется разностью между значениями граф 7 и 5. Если он равен нулю, то работа является критической;
з) в графе 10 резерв времени событий j определяется как разность позднего окончания работы, заканчивающегося событием j графы 7, и ранним началом работы, начинающимся событием j;
и) значение свободного резерва времени работы определяется как разность значений графы 10 и данных графы 8 и указывает на расположение резервов, необходимых для оптимизации.
Критический путь: (1,3)(3,5)(5,7)(7,8)
Продолжительность критического пути: 25

Решение было получено и оформлено с помощью сервиса:
Параметры сетевой модели
Вместе с этой задачей решают также:
Минимальный разрез сети
Теория игр
Критерии Максимакса, Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица
Многоканальная СМО с неограниченной очередью